ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 09.12.2014 № 488-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов инфраструктуры промышленно-логистического парка Новосибирской области, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области на 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование объекта строительства	Технические характеристики (мощность)	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Стоимость, всего,
в рублях	В том числе стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в рублях	Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства ПЛП, в рублях	Средства 
АО «УК «ПЛП»,
в рублях	Срок вложе-ния инвести-ций	
				сметная стоимость,
в рублях	Ориентир. Ст-ть,
в рублях	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год	2020 год	2021 год	2014 год
	2015 год 	2014 год	2015 год		
1	Канализационный коллектор и сооружения 
для глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ПЛП НСО (СМР)*	3 500 куб/ сутки	II кв. 2015 г.	478853377**		59509245	24766373							24766373		59509245		III кв. 2015 г.	
2	Канализационный коллектор ливневых стоков ПЛП НСО (СМР)*	300 л/сек	IV кв. 2020 г.	776918820**		69899822	29625289	172299412	33663105	4317780		7094269		169405005	77594850	69899822		IV кв. 2020 г.	
3	Распределительная сеть 20 кВ от КТПН-2х400-20/0,4 кВ до РП-3-20 кВ со встроенной ТП (СМР)*	20 кВ	II кв. 2015 г.	55550797		9157571	42602974							42602974		9157571		II кв. 2015 г.	
4	Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 3 очередь строительства. 3 пусковой комплекс (СМР)*	0,43 км	III кв. 2015 г.	8100009		810001	7290008							7290008		810001		III кв. 2015 г.	
5	Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 3 очередь строительства
1, 2 пусковой комплекс (СМР)	2,5 км	III кв. 2016 г.	79554691			10153706	69339721						49636665	21907419	5515185	2434158	IV кв. 2016 г.	
6	Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 2 очередь строительства. Пусковой комплекс IV (СМР)*	3,52 км	I кв. 2015 г.	264636501**		4999777	64845565							64845565		4999777		I кв. 2015 г.	
7	Участок тепловой сети от опоры Н40 до УТ16 на территории ПЛП НСО (СМР)*	0,48 км	III кв. 2015 г.	8870374		4076535	4116422							4116422		4076535		III кв. 2015 г.	
8	Наружный газопровод высокого и среднего давления 
для газоснабжения канализационных очистных сооружений (КОС) и ливневых очистных сооружений (ЛОС) ПЛП НСО (СМР)*	0,81 км	I кв. 2015 г.	1581356**		609020	181262							181262		609020		I кв. 2015 г.	
9	Участок тепловой сети от УТ-17 до УП в районе разметки ПК3-ПК4 автомобильной дороги участка № 1 второй очереди 
на территории ПЛП НСО (СМР)*	0,49 км	III кв. 2015 г.	5450090		1161827	3807166							3925045		1043948		IV кв. 2015 г.	
10	КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной подстанции ООО «Арнег» (СМР)*	20 кВ	II кв. 2015 г.	3802018**		1957318	1844700							1660230		2141788		II кв. 2015 г.	
11	КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной подстанции ЗАО «Корпорация Глория Джинс» (СМР)*	20 кВ	III кв. 2015 г.	2028402**		1092002	936400							936400		1092002		III кв. 2015 г.	
12	КЛ-20 кВ от РП-3 до трансформаторной подстанции ООО ЗКПД «Арматон» (СМР)*	20 кВ	I кв. 2015 г.	1771833**		1005315	766518							766518		1005315		I кв. 2015 г.	
13	КЛ-20 кВ от РП-3 до трансформаторной подстанции ООО «Сибалюкс Ресурс» (СМР)*	20 кВ	II кв. 2015 г.	2412500		985550	976509							976509		985550		III кв. 2015 г.	
14	КЛ-20 кВ от муфтового соединения ПС «Сокол» до РП-1-20кВ (СМР)*	20 кВ	I кв. 2016 г.	19778742		16225500	2337742							16706917		1856325		II кв. 2016 г.	
15	Реконструкция РУ-10кВ ТЭС (СМР)	10 кВ	III кв. 2017 г.	10308947				9474869						8527382		947487		IV кв. 2017 г.	
16	ПЛП НСО. Железнодорожные пути необщего пользования. Реконструкция пути. Врезка стрелочного перевода (СМР)*	Стрелочный перевод Р65	I кв. 2015 г.	1674516		837258	837258							837258		837258		I кв. 2015 г.	
17	КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной подстанции ООО «ВСК» (СМР)*	20 кВ	II кв. 2015 г.	3021365**		1876898	1144467							1144467		1876898		II кв. 2015 г.	
18	Поставка оборудования КТПН-2*400-20/0,4кВ в районе РН № 2*	20 кВ	IV кв. 2014 г.	1620000		810000	810000							810000		810000		I кв. 2015 г.	
19	Поставка оборудования КТПН-2*400-20/0,4кВ в районе РН № 2*	20 кВ	IV кв. 2014 г.	1730000		865000	865000							865000		865000		III кв. 2015 г.	
20	Газопровод на площадке «А». 
4 очередь (СМР)	15 000 м3/час	III кв. 2016 г.	11163450				11116763							10005087		1111676	IV кв. 2016 г.	
21	Железнодорожный путь. 
4-очередь (СМР)	1 км	III кв. 2017 г.	32032734					25449948						22904953		2544995	IV кв. 2017 г.	
22	КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной «Росспак» (СМР)	1,5 км	III кв. 2017 г.	3793398					3378322						3040490		337832	IV кв. 2017 г.	
23	Коллектор хозяйственно-бытовых сточных вод. II очередь. 
Пл. «А» (СМР)	1 750 куб.м/ сут.	III кв. 2017 г.	134458467				20050488	64236327						75858134		8428681	IV кв. 2017 г.	
24	КЛ-35 кВ * 	4 МВт	IV кв. 2015 г.	2470893			1976715	494179							494179		1976715	II кв. 2016 г.	
25	Система АСКУЭ распределительной сети 20 кВ	80 абонентов	III кв. 2016 г.	1382255				1340123							1206110		134013	IV кв. 2016 г.	
26	Распределительная сеть 20 кВ с РП-4 
со встроенной ТП на площадке «А»	20 кВ, 8 МВт	III кв. 2017 г.	61082500					58241527						52417374		5824153	IV кв. 2017 г.	
27	Железнодорожный путь. 5-я очередь 	0,5 км	III кв. 2017 г.	16919250					15834703						14251233		1583470	IV кв. 2017 г.	
28	Кабельная линия КЛ - 0,4 кВ от ТП -7 до ВРУ - 04 кВ ООО «Сладомир Логистик Групп»	0,4 кВ	III кв. 2017 г.	1484330					954680						859212		95468	IV кв. 2017 г.	
29	Система телемеханизации распределительной сети 20 кВ ПЛП НСО	5 распределительных пунктов 20 кВ	IV кв. 2019 г.	7305121							7305121				6574609		730512	IV кв. 2019 г.	
30	Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 4 очередь строительства	0,25 км	IV кв. 2020 г.	14188720								14188720			12769848		1418872	IV кв. 2020 г.	
31	Канализационный коллектор ливневых стоков ПЛП НСО. 2 очередь, 1 этап. (СМР)	0,88 км	IV кв. 2021 г.
	103653160									103653160		68079502		35573658	
IV кв. 2021 г.	
Итого			2117598616	0	175878639	199884074	284115554	201758612	4317780	7305121	21282989	103653160	400000000	367963000	168038727	62194202		

*Объект является предметом действующего договора подряда (купли-продажи).
**Сметная стоимость строительства указана с учетом финансирования строительства объекта, осуществляемого АО «УК «ПЛП» до 2014 года.».
_________